정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		과 장 김수복 행정6급 곽성수 (033-560-2548)
③정책사업명	정선아리랑 전시문화공연센터 신축사업
④선정기준	군이 발주하는 10억원이상의 예산이 투입되는 건설사업		⑤사업기간		2012. ~ 2015.
⑥주요내용	○ 추진배경 아리랑에 대한 가치 있는 자료 보존 및 복합 문화공간 제공으로 문화예술분야의 관광상품화를 통한 지역경제 활 성화 도모 ○ 사업개요 - 위 치 : 정선군 정선읍 애산리 560번지 일원 - 건축규모 : 지하1층 지상3층(건축면적 A=4,300㎡) ➩ 사업부지 A=10,620㎡, 건축연면적 A=6,271㎡ - 건축구조 : 철근콘크리트+철골조(용도 : 문화 및 집회시설) - 총사업비 : 28,000백만원 (광특 2,000 도 2,000 기금 16,000 군 8,000) - 공사기간 : 2008년 ~ 2015년 - 주요시설 : 공연장(612석), 전시장 A=612㎡, 편의시설 등 ○ 추진경과 - 2008.12.26. : 신축 기본계획 수립 - 2009.04.19. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 2011.03.31. : 지방재정 투융자 재심사 - 2011.06.14. : 지방건설기술심의위원회 심의 - 2011.06.30. : 건립부지 매입 및 지장물 보상 - 2012.05.21. : 정선군 건축심의위원회 심의 - 2012.09.28. : 강원도 계약심사 - 2012.12.12. : 정선 군계획위원회 자문 - 2013.06.14. : 강원도 정선 군관리계획 결정(변경)고시 - 2013.06.24. : 신축공사 계약체결 - 2013.07.14. : 공사착공 - 2014.04.20. : 공사진행(지하터파기 및 구조물 설치) 공정률 10%