도급계약변경추가계약서

계 약 명		소하천(길운천) 수해복구 공사(9월)
계약 금액	당 초	금칠천오백팔십팔만팔천원(｀75,888,000원)
	변 경	금칠천오백팔십팔만팔천원(｀75,888,000원)
	금회변경	변경사항 없음
계약 기간	당 초	2002년 12월 05일 ∼ 2003년 03월 04일 까지
	변 경	2002년12월05일 ∼ 2003년06월05일 까지
기 타 사 항		o 동절기 공사중지 해제에 따른 추가변경계약 o 금회 변경사항외 당초계약사항과 같음
금회 계약사항 이외의 사항은 당초의 계약사항과 같으며 본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 각 1통씩 보관한다. 2003 년 03 월 13 일 계약담당공무원 정 선 군 경 리 관 신 선 웅 (인) 계 약 자 상 호 : 길동건설(주) 주 소 : 강원 정선군 정선읍 봉양리 000-0 대표자 : 홍 길 동 (인) 법인(주민)등록번호 144911-0000000 연대보증인 상 호 : 주 소 : 대표자 : (인) 법인(주민)등록번호 -

계약보증금 납부서
입 찰 번 호	제 호	입찰년월일		년 월 일
계 약 건 명	소하천(길운천) 수해복구 공사(9월)
계 약 번 호	제 호		계약년월일	2003년 02월 일
계약 금액	금이억이천오백칠만오천원(｀225,075,000원)
계약 보증금액	금사천오백일만오천원(｀45,015,000원)
보증금납부방법	서울보증보험보증서
보 험 기 간	2003년 02 월 일부터 2003년 월 일까지
위의 금액을 계약 보증금으로 납부합니다. 2003년 02월 일 상호또는명칭 : 길동건설(주) 주 소 : 강원 정선군 정선읍 북실리 000-0 대 표 자 : 홍 길 동 (인) 법인(주민)등록번호 : 144911-0000000 정선군수 귀하
세입세출외현금출납공무원 성 명 : (인)
유가증권 취급 공무원 성 명 : 유 승 근 (인)