2009.  01.

숲 가꾸기 사업 실시설계 용역

과 업 지 시 서

정    선    군

과   업   지   시   서

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명 : 2009년도 숲가꾸기사업 실시설계용역

2. 과업목적

숲 가꾸기 사업 대상지의 사업비 산출과 작업방법을 위한 세부적인 지침을 작성하고 현지에 적합한 설계로 숲 가꾸기 사업의 성과를  제고함에 있다.

3. 과업대상

◦ 위  치 : 정선군 동면 화암리 산290번지 외 378필지

◦ 사업명 : 2009년도 숲가꾸기사업 실시설계용역

◦ 면  적 : 700ha

4. 과업의 내용

◦ 기본설계서 검토

◦ 표준지조사

◦ 설계도서 작성

◦ 제시방서 작성

◦ 사업지 내의 소나무재선충병 감염여부 확인

◦ 기타지시사항

5. 과업기간 : 착수일로 부터 50일간

Ⅱ. 과업수행 준수사항

1. 다음사항에 대하여는 발주자의 승인을 받아 기간을 변경할 수 있다.

◦ 과업기간 중 강우일수가 최근 5년간 연평균강우일수보다 많아

과업수행 상 차질이 있을 때

◦ 천재지변으로 인하여 과업수행이 불가능 할 때

◦ 발주자 지시에 의하여 과업수행이 중단되었을 때

◦ 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때

2. 실시설계자는 계약체결 후 7일 이내에 작업을 착수하여야 하며   착수계, 과업수행계획표, 책임기술자 자격증 사본 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 한다.

3. 책임기술자는 실시설계 계약에서 규정된 업무를 관련 법규에 따라        총괄․수행하여야 한다.

4. 책임기술자는 감독자와 협의하여 숲 가꾸기 사업시행에 이상이

없도록 적절한 방안을 마련하여 실시설계도․서에 반영하여야 한다.

5. 실시설계자는 작업착수 후 15일 이내에 기본설계도․서를 검토하고 개략적인 현지조사를 실시하여 그 결과를 기초로 사업대상지와 설계방향 등을 결정하여 과업을 수행하여야 하며, 필요할 경우에는 발주자와 협의하여 확정한 후 표준지조사 및 세부설계를 하여야 한다.

6. 아래의 각종 자료를 참고로 하여 과업을 수행하여야 하며 과업     수행 상 필요한 자료는 발주자에게 요청하여 과업을 수행하여야 한다.

◦ 발주자가 제공한 기본설계도․서

◦ 지속가능한 산림자원 관리지침(산림청훈령 제890호 : 2006.09.25.) 및

숲가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침(산림청훈령 제907호 : 2007.04.17.)

◦ 지역산림계획, 산림경영계획 등 상위계획

7. 실시설계자는 계약체결 후 발주자가 제시하는 과업수행 준수사항과

기본적인 과업지침 등을 숙지한 후 충분한 사례 및 자료를 수집 하여

본 과업의 성과가 수준급이 되도록 최선을 다하여야 한다.

8. 실시설계자는 발주자가 요청할 경우 사업시행자와 감리자를 대상으        로 실시설계의 방향, 작업요령, 작업시 주의사항 등에 관한 교육과        현장 설명을 하여야 한다.

9. 실시설계자에게 발주자가 제시하는 기본요소의 제원은 다음과 같다.

◦ 과업수행 준수사항 및 과업지침

◦ 설계 단위별 사업비내역 및 위치도

◦ 기본설계도․서

◦ 설계와 관련한 각종 자료의 제공 등

10. 실시설계자는 사업계획, 계약사항에 의거 선목량 등을 결정하여

실시설계에 반영하여야 한다.

11. 실시설계자는 과업진행 중 발주자가 필요하다고 요구하는 사항에 대하여 보고할 책임을 진다.

12. 실시설계자는 실시설계 사전검토를 위하여 계약기간의 9할 이전까지 설계를 완료하고 문서로 감독자에게 사전검토를 요청하여야 한다.

13. 실시설계자는 과업수행 완료 전 이라도 발주자의 요구가 있을 경우에         는 부분적으로 정리하여 기성과를 제출하여야 한다.

14. 본 과업의 품셈은 숲 가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침(산림청훈령 제907호 : 2007.04.17.)의 숲 가꾸기 품셈 적용기준을 적용한다.

15. 본 과업지시는 과업수행에 필요한 사항을 규정하였는바, 이에 규정

되지 아니한 사항은 정부 관련법령과 자료를 수집, 발주자와 협의하여 수행하여야 한다.

16. 본 과업지시에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는    중요사항은 발주자와 협의 결정하고 기타 경미한 사항이 발생하여 추가 과업이 필요하다고 인정될 시 실시설계자는 이에 따라야 하며 소요되는 경미한 비용은 실시설계자가 부담한다.

17. 실시설계자는 다음과 같은 보안 대책을 준수하여야 한다.

◦ 실시설계자는 보안 대책을 수립하여야 한다.

◦ 모든 성과품은 실시설계자가 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로

유출 시켜서는 아니 된다.

◦ 과업 폐기물은 소각 처리하여야 한다.

◦ 기타 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안 사항

불이행으로 발견되는 모든 책임은 실시설계자가 진다.

18. 본 과업의 진행 중 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 실시설계자가 진다.

19. 본 과업 수행 상 다음과 같은 조건 발생시 발주자의 방침에 의거설계변경을 할 수 있다.

◦ 계획변경으로 인하여 과업의 범위가 변경될 때

◦ 기타 발주자가 필요하다고 인정할 때

◦ 위 각호의 사유로 과업 변경 요인이 발생될 시 또는 계약 체결 후 예정가격 및 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견 되거나 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때

20. 발주자는 다음과 같은 조건이 발생되면 용역계약을 해약할 수 있다.

◦ 설계 이행이 불가능하다고 인정될 때

◦ 발주자의 지시에 불응하고 설계를 진행할 때

◦ 기타 계약조건에 위배할 때

21. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제31조 관련〔별표11〕책임기술자․감리원 배치기준의 실시설계의 책임기술자를 배치하여야 하며, 설계도․서에는 실시설계 책임기술자가 서명 날인하여야한다.

Ⅲ. 설계과업지침

1. 일반사항

◦ 과업 대상지는 발주자가 선정한 지역에 조사, 설계함을 원칙으로 하되 사업시행에 장애요인 발생시에는 발주자와 협의하여 과업 대상지를 변경조정 할 수 있다.

◦ 설계사업비 예산은 『숲 가꾸기 설계ㆍ감리 및 사업시행 지침(산림청훈령 제907호 : 2007.04.17.)』에 의거 설계하여야 하며 설계조사 결과 현지 여건, 공사의 난이도에 따른 사업비 조정은 발주자의 승인에 의거 조정할 수 있다.

◦ 사업비는 부가세를 포함한 총액으로 산출하여야 한다.

◦ 실시설계도․서 작성 시 작성내용에 관한 이의가 있을 경우와 기타 과업수행과 관련하여 실시설계도․서 작성자가 단독 결정이 곤란한 사항에 대하여는 발주자와 협의하여 결정한다.

◦ 사업비가 최대한 절감되도록 설계하되 현지 여건에 부합한 완벽한 설계를 하여야 한다.

◦ 작성된 각종 실시설계도․서는 상호 그 내용이 합치되어야 하며 해독이 용이하도록 작성하여야 한다.

◦ 성과품 납품 전에 발주자의 사전 검토를 받은 후 납품하여야 하며 납품 후 설계 심사과정에서 수정 및 보완을 요하는 사항이 발견되어 발주자의 지시가 있을 경우 즉시 이에 응하여야 하며 수정 및 보완에 소요되는 기간은 과업수행 기간에 제외한다.

2. 표준지조사

◦ 표준지 조사비율을 사업대상지 면적의 1% 이상으로 하여야 한다.

◦ 표준지 크기를 개소당 100㎡～400㎡ (10m×10m, 10m×20m,

20m×20m사각형 또는 반지름 5.67m, 8.0m, 11.3m 원형 표준지)로 하여야 한다.

◦ 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 200m×200m 격자상의 교차점에 400㎡의 표준지를 일정 간격으로 교차점에 배치하여야 한다. 다만, 일정 격자의 교차점에 표준지 배치가 불가능할 경우 상하좌우 50m범위 내에서 표준지 위치를 조정 할 수 있다.

◦ 사업대상지가 소면적으로 분산되거나 임상이 다를 경우에는 그 임분의 표준이 되는 곳에 표준지를 배치하고 GPS를 이용하여 좌표를 기록하여야 한다.

◦ 공정하고 정확한 표식과 사업비산출을 위하여 표준지내에서는 다음과 같은 측정 또는 표식을 한다.

- 가슴높이 지름은 표준지 내에 6cm 이상 교목을 대상으로 2cm 괄약으로 측정한다.

- 표준지경계는 친환경성 백색수성페인트로 표시한다.

- 제거대상목은 친환경성 적색수성페인트로 표시한다.

- 도태간벌의 미래목 또는 정량간벌의 형질우세목 및 가지치기

대상목은 친환경성 황색수성페인트로 표시한다.

◦ 입목의 수고는 설계대상임분에서 경급별 3본 이상을 m 단위로 측정한다.

◦ 작업조건별 난이도를 적용하기 위하여 대상 사업지의 접근성, 경사도, 하층식생 등을 조사한다.

◦ 표준지 배치는 임도변, 도로변 등 접근이 용이한 지역으로만 배치하지 않도록 하여야 한다.

◦ 표준지에 대해서는 사업 전후 대비, 사후 점검이 용이하도록 숲가꾸기 사업을 실행하지 않고 보존하므로 설계서에 반영하지 않는다. 다만, 도로변 등 경관적으로 중요한 지역일 경우 발주자와 협의하여 설계서에 반영하고, 사업 실행 사유를 실시설계도․서에 기록 하여야 한다.

3. 임소반 및 표준지 GPS좌표 기입

사업지역의 위치정보의 표준화 및 산림지리정보와 연계, 사후관리

자료확보 등을 위하여 임소반 및 표준지 GPS좌표를 다음 서식과

같이 기입하여야 하며, 좌표의 기입 방법은 임소반 및 표준지의

중심부 선택하여 TM좌표 또는 경위도좌표 값을 기입한다.

임소반별	GPS 좌표	표준지번호	GPS 좌표
1-0-1		1
		2
		3

4. 설계도서의 작성

가. 조사결과

◦ 조사결과는 다음의 내역이 나타나야 한다.

- 표준지 번호, 표준지 면적, 조사자, 조사일자

- 수종, 흉고직경, 수고, 재적

- 가지치기본수, 제거목 본수

- 할인․할증 요소 등

나. 실시설계의 내용 - 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행지침(산림청훈령 제 900호 : 2007.04.17.)의 다음 각 호에 해당하는 서식에 따라 실시설계를 작성한다.

- 설계설명서 : 별지 제7호서식

- 소반별시방서: 별지 제8호서식

- 작업지시도 : 별지 제9호서식

- 실시설계표준지배치도 : 별지 제10호서식

- 사업시행예정공정표 : 별지 제11호서식

- 사업비원가계산서 : 별지 제4호서식

- 설계내역서 : 별지 제5호서식

- 소반별(ha당) 숲가꾸기 단가산출서 : 별지 제12호서식

- 소나무 재선충병 미감염 확인서 : 별지 제13호서식

- 선목사업이 분리발주될 경우 선목사업 설계도․서

- 그 밖에 발주자가 용역 계약시 요구하는 사항.

다. 설계도면 작성

◦ 위치도는 축적 1/25,000지형도를 사용한다.

◦ 설계도는 발주처에서 제공하는 지적도(임야도)와 1/5,000 수치지형도를 활용하여 작성한다.

◦ 설계도에 사용된 1/5,000 수치지형도(측량의 기준;좌표)는 사업시행및 각종 확인에 용이하도록 세계측지계( ITRF2000, GRS80)인지 또는 한국측지계(BESSEL)인지를 표기한다.

◦ 설계도면에는 표준지배치도 와 작업지시도가 포함되어야 한다

-표준지위치배치도: 수치지형도상 임소반구역 및 표준지 위치표시

-작업지시도(작업내역도): 지번도 및 임야도에 소반 및 사업종

구역별 임지현황 작업시방 등을 요약하여 표시

․소반 사업구역별 사업종 및 주요수종, 산림의 기능, 관리목표, 사업량 ( 미래목, 제거목, 가지치기 본수 등), 작업시방 및 산물수집선등 특이사항 표시

5. 성과품 납품

아래와 같이 설계도․서를 납품한다.

가. 설계서 : 각5부

나. 설계도 : 각5부(A1)

다. 설계도․서 CD : 1EA

Ⅳ. 기타 요구사항

1. 과업 대상지는 발주자가 선정한 지역에 조사, 설계함을 원칙으로          하되 사업시행에 장애요인 발생시에는 발주자와 협의하여 과업 대         상지를 변경조정 할 수 있다.

2. 과업 대상지 중 평균 가슴높이 20㎝(잣나무림은 30㎝)를 초과하는

솎아베기 사업 등 규정에 부합하지 않는 벌채목적의 성림지는 사업

대상지에서 제외 한다. (단, 목재생산림이외의  수원함양림 등 공익적

숲가꾸기 사업에 대하여는 대상산림의 평균경급을 30㎝ 이내로  기준

을 완화하여 적용 한다.)

3. 과업 대상지 내에 포함된 재해발생 우려지역의 산물 수집에 대하여는

산물을 입목 재적으로 산정하여 전량 수집토록 설계에 반영 한다.

4. 실시설계도․서는 사업량을 감안하여 180ha 내외로 구분하여

작성하고 각 5부를 납품 하여야 한다.

5. 사업시행 예정공정표(별지 제11호서식)의 사업기간 및 총 투입

인원은 기능인 영림단을 기준으로 산출한다.

6. 노임단가는 대한건설협회 조사․공표하는 2008년도 하반기 시중

노임단가를 적용한다.

7. 실시설계도․서는 계약기간의 5할 이내에 2건을 작성하여

각5부를 반드시 기성납품 하여야 한다.