2004년도

과   업   지   시   서

( 정선군 공설묘지 조성사업 전면책임감리용역 )

2004. 12.   .

정   선   군

목            차

Ⅰ. 용역과업설명서------------------------------------- 1

Ⅱ. 일반과업지시서------------------------------------- 2

Ⅲ. 특별과업지시서------------------------------------- 8

Ⅳ. 보안 및 기타유의사항-------------------------------- 37

Ⅴ. 책임감리의 부실측정 및 조치 ------------------------- 38

Ⅰ. 용역과업 설명서

1. 목  적·

○ 본 과업은 장사등에 관한 법률에 의거 국토공간의 효율적인 이용 및 보전의 측면에서 장래 묘지 수요의 증가에 따라         무질서하고 무분별한 산림 훼손의 요인을 해소하고 묘지를 집단화, 공원화 하여 국토의 효휼성을 높이고 증가하는 묘지        수요를 충족시킴으로써 군민의 복지증진에 기여하고자 하는데 그 목적이 있으며,

○ 공사단계에서는 실시설계 도서와 제반시방서 및 관계규정에 따라 철저한 품질 관리 및 안전관리와 정교하고 완벽하게        시설물을 보수하고자 풍부한 경험과 기술인력을 보유하고 있는 감리 전문회사로 하여금 전면책임감리용역과업을             성실히 수행토록 하는데 있음.

2. 과업의 범위

가. 용 역 명	:  정선군 공설묘지 조성사업 전면책임감리용역

나. 위    치	:  강원도 정선군 북면 남곡리 산 27번지 일원

다. 공사개요	:  공설묘지조성 (면적 129,500㎡, 약 39,173평)

라. 과업범위	:

1) 건설기술관리법 제27조 제4항, 동법 시행령 제2조 제1항, 동법 시행규칙 제34조와 건설교통부 제정 감리업무수행              지침서 규정과 기타 필요한 사항

2) 기 설계 완료한 설계도서 등 성과품에 대한 검토 및 현행시방서 기준에 맞게 실시설계도서 보완

Ⅱ. 일반과업지시서

1. 감리업무 수행

1) 책임감리를 수행함에 있어 본 공사의 설계도서, 감리업무 수행지침서, 과업지시서와 아래의 각종 시방서 및 규정에           의하여 수행할 수 있도록 사무실에 비치하여 이를 충분히 숙지하고 철저히 이행하여야 한다.

(1) 도로의 구조, 시설기준에 관한 규정

(2) 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준

․도로공사 일반 표준시방서

․도로공사 표준시방서

․도로교   표준시방서

․도로포장 설계 및 시공지침

․콘크리트 표준시방서

․하천공사 표준시방서

․상하수도 표준시방서

․조경공사 표준시방서

․구조물 기초설계기준

․전기공사 표준시방서

․설비공사 표준시방서

․건축시공 표준시방서

(3) 건설공사 관련법령 및 규정(건설산업기본법,건설기술관리법,도시계획법, 국가를당사자로 하는 계약에 관한 법률 등)

(4) 한국산업규격

(5) 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람

(6) 환경영향평가법, 환경정책기본법

(7) 산업안전보건법

(8) 기타 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

2. 감리원의 기본업무

1) 감리원은 건설관리법 시행령 제52조 제1항의 업무와 규칙 제34조의 규정에 의한 감리업무를 성실히 수행하여야 한다.

2) 발주처와 감리회사 간에 체결된 감리용역계약의 내용에 따라 감리원은 본 공사가 설계도서 및 기타 관계서류의              내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전 및 환경관리 등에 대한 기술지도를 하며,         건설기술관리법령에 따라 발주처의 감독권한을 대행하게 된다.

3. 감리원의 지위

1) 감리업무를 수행함에 있어 감리원은 시공자의 감독업무를 수행하고 발주청은 감리업무를 지도․감독한다.

2) 감리원의 업무자세

감리업무에 종사하는 자는 다음의 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 품질향상에 노력하며, 감리원으로서의  품위를        유지하여야 한다.

(1) 감리원은 관계법령과 이에 따른 명령, 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며 신의와 성실로서 업무를             수행한다.

(2) 감리원은 품위를 손상하는 행위금지

(3) 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안됨.

(4) 감리원은 공사감리를 수행함에 있어서 성실, 친절, 공정, 청렴 결백하게 업무수행

(5) 감리원은 건설공사의 품질향상을 위하여 기술개발 및 보급에 전력

(6) 감리원은 감리업무를 수행함에 있어서 본 공사의 특수성을 파악한 후 감리수행

(7) 감리원은 시공자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경시키거나, 기일 연장 등 공사계약                  조건과 다른 지시나 결정을 하여서는 아니됨.

(8) 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는                  수시로 발주청에 보고하고 지시를 받아 업무를 수행한다.

(9) 감리전문회사 대표자 및 감리원은 본 공사 시행 중은 물론 공사가 종료된 후라도 감사기관의 수감요구가                     있을 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해자가 소송 제기 시 소송                 업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

3) 비상주 감리원의 업무범위

감리 전문회사의 본사 등에 근무하면서 현장 상주감리원의 업무를 지원하는 비상주 감리원의 업무범위는 다음과 같다.

(1) 감리수행지침서 “2.1.2”항에서 규정한 설계서 등의 검토

(2) 현장 감리원의 능력범위를 벗어난 현장시공상의 문제점에 대한 기술검토와 민원사항에 대한 현지조사 및 해결방안	검토

(3) 중요한 설계변경에 대한 기술검토

(4) 설계변경 및 계약금액 조정의 심사

(5) 기성 및 준공검사

(6) 정기적(분기 또는 반기별)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검, 확인, 평가하고 기술지도

(7) 기타 감리업무 추진에 필요한 지원업무

4. 감리업무 절차 및 운영

감리회사는 상주감리원 및 비상주 감리원의 개인별 업무분담 내용에 따라 업무수행계획을 수립하고 다음절차에 의거         과업을 수행토록 하여야 한다.

1) 절차

2) 감리원 운영 조직

3) 운영 지침

(1) 승인된 감리원은 업무의 연속성, 효율성 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 감리용역 완료시까지 근무토록	하여야 하며 교체가 필요한 경우에는 교체사유를 명시하여 발주청의 사전 승인을 받아야 한다.

(2) 감리단의 조직은 공사담당과 품질담당 등으로 현장여건에 따라 구성토록 함으로써 감리업무를 효율적으로                    수행할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 책임감리원은 보조감리원에게 개인별로 업무를 분담하고 분담내용에따라 업무 수행계획을 수립하여 과업을                   수행토록 하고 매일 감리업무의 추진계획 및 실적이 기록된 개인별 일지를 취합하여, 그 내용을 확인․점검하고              이를 비치하여야 하며 준공 시에는 발주청에 제출하여야 한다.

(4) 감리원은 업무계획을 수립, 운영하고 특히 엄격한 품질관리를 위하여 공사단계 별 품질시험을 철저히 이행하여야	하며, 미시행 또는 불합격일 경우 즉시 시정토록 하고 그 구간에는 시정이 완료될 때까지 후속 공사를 진행시켜서	는 안된다.

(5) 감리원의 구성은 과업지시서에 기술된 과업내용에 의거 관련 분야 기술자격자 또는 학력, 경력을 갖춘 자로                 구성 하고 공사발주 초기에 보상등이 지연되거나 민원발생 등으로 공사추진이 원활하지 않을 경우와 동절기                 공사중지 기간등 공사진행 상태에 따라 발주청과 협의하여 감리원을 탄력적으로 조정 운영하여야 한다.

(6) 각 감리원이 작성 비치하여야 할 일지에는 다음 내용등이 수록되어야 한다.

가. 일일감리업무 수행내용

- 주요 구조물 등의 검측결과, 지적사항 및 시정조치사항

나. 시공과정에서의 문제점과 이의 해결방법 등 시공에 대한 전반적인 자체 평가서

다. 민원사항 접수, 처리 및 조치계획

라. 공사추진 중에 발생된 실패사례를 육하원칙에 따라 상세히 기록하고 개선결과도 상세하게 기록, 작성

마. 품질보증계획 이행확인, 품질시험실시, 지도 및 시험성과 관한 검토, 확인

바. 재해예방대책 및 안전관리의 지도

사. 하도급계약 내용에 대한 타당성 검토

아. 민원사항 해결을 위한 업무수행

자. 기타 주요 감독업무 수행 사항

(7) 자문요구

가. 발주청은 본 공사와 관련하여 공법검토, 특수공법 등에 대한 기술적인 자문을 요구할 수 있으며 이에 대하여	감리 전문회사는 자문에 응하여야 한다.

나. 감리회사는 발주청이 요구하는 중요한 사항에 대하여 본사 지원반을 운영자문하여야 하며, 검토가 불가능하여	제3자에게 의뢰해야 하는 전문성을 요하는 자문은 국내외 전문가에게 자문을 받아 의견을 제시하여야 한다.

5. 상주감리원의 현장근무

1) 상주 감리원은 공사현장에 상주하여야 하며 업무 또는 부득이한 사유로 1일이상 현장을 이탈하는 경우에는 반드시           근무 상황부에 이를 기록하고 책임감리원은 발주청의 승인(부재시 유선보고)을 받아야 한다.

2) 감리회사는 감리업무에 종사하는 감리원이 감리업무 수행기간 중 법에 의한 교육이나 민방위기본법 또는 향토예비군         설치법에 의한 교육을 받는 경우나 근로기준법에 따른 유급 휴가 시에는 감리업무에 지장이 없도록 직무대행자              지정하여 직무를 대행토록 하고 업무인계인수 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

6. 일반과업 지시서의 내용과 특별과업 지시서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별과업 지시서가 우선한다.

7. 일반 및 특별과업 지시서에 명기된 내용이외에 정밀시공 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주청과 시행하여야 한다.

Ⅲ. 특별과업지시서

1. 감리용역 기간

용역 과업기간은 착수 일로부터 25개월로 하며, 대상 공사기간이 연장되는 경우에는 공사 준공기한까지로 한다.

2. 설계변경 조건

1) 건설기술관리법에 의한 감리 대가기준이 변경되었을 때

2) 감리기간 변경 및 감리용역의 중단 등으로 감리기간의 증감이 있을 때

3) 감리 업무량에 따라 감리원의 증감이나 등급의 변경이 있을 때

4) 제경비 및 기술료는 직접인건비의 증․감에 따라 정산한다.

5) 직접경비는 실비용에 의하여 정산한다.

가) 감리원의 주재비 및 출장여비는 직접인건비의 증감에 따라 정산

나) 현지차량 운행비 및 현지사무원 급료비는 실제 투입일수에 맞추어 정산

다) 보고서 인쇄비 등은 발간부수 및 면수에 따라 정산

6) 감리대가기준 제8조 ③항에 따라 1개월 감리일수는 22일 기준 개월별 감리일수가 추가될 경우에는 근로기준법에 따라	설계변경 및 정산

7) 기타 사업시행자의 사정에 의한 예산의 증․감등 정당한 사유가 발생되었을 때

3. 감리업무 착수

1) 감리회사는 계약체결 즉시 상주 및 비상주감리원 투입 및 운영계획이 포함된 감리업무 수행계획서를 작성 발주청에	제출하고 감리원 투입계획을 협의한 후 감리원을 투입하여야 한다.

2) 감리회사는 감리용역 착수 시 다음 각호의 서류를 첨부한 착수 신고서를 제출하여 발주청의 승인을 받아야 한다.

가) 감리업무 수행계획서

나) 감리비 산출내역서

다) 상주, 비상주 감리원 지정신고서와 감리원의 경력사항 확인서

라) 감리원조직 구성 내용과 감리원 투입기간 및 담당업무

마) 기타 발주청이 지정한 사항

3) 감리원은 다음 서류를 기록 비치하여야 하며, 용역 준공시 발주청에 서류를 인계하여야 한다.

(1) 출근부

(2) 근무상황부 및 근무상황판

(3) 감리업무일지

(4) 명령부 및 지시부

(5) 발생품(잉여자재)정리부

(6) 공사기록부

(7) 지급자재 수불부

(8) 주요자재 검사부

(9) 검측서류

(10) 시공완료 검측성과조서

(11) 현장실정 보고서

(12) 공법검토 등 기술검토사항

(13) 품질시험대장 및 관리표

(14) 각종회의록

(15) 매몰부분 검측대장 및 사진

(16) 감리원 교체 인수․인계서

(17) 공사사진첩

(18) 각종 정기보고서

(19) 천후표, 온도표, 수위표, 조위표

(20) 유지관리지침서

(21) 건설지

(22) 기타 필요한 서류 및 도표

4. 감리원 배치 기준

1) 감리원은 입찰시 제출한 감리용역 과업수행 참여신청서에 명시된 자로 배치하여야 한다. 다만 퇴직, 질병등 사유로	부득이 감리원을 변경할 경우에는 미리 발주청의 승인을 받은 후 당초 감리원과 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을	가진 자를 배치하여야 한다.

2) 발주청은 감리원 또는 감리조직 구성 내용이 당해 공사 내용에 적합하지 않다고 인정될 때에는 변경을 요구할 수	있으며, 변경 요구를 받은 감리회사는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

3) 감리원은 공사시공과 관련된 각종 인․허가 사항을 포함한 제 법규 등을 시공자로 하여금 준수토록 지도․감독하여야	하며, 인․허가 사항에 대한 자료를 작성 제출하여야 한다.

4) 감리원 구성은 다음과 같이 관련분야 기술자격증 또는 학력․경력을 갖춘 자로 한다.

(1) 책임감리원(감리사․감독총괄):건설기술관리법 시행령 제51조의2 별표3의 자격 기준 이상인 자

(2) 보조감리원(감리사보․시공 및 안전관리담당, 품질관리 또는 시공담당) : 건설기술 관리법 시행령 제51조의2 별표3의	자격기준 이상인자

(3) 보조감리원(감리사보․품질관리 및 시공담당):건설기술관리법 시행령 제51조의2 별표3의 자격기준 이상인 자

(4) 비상주감리원(현장감리업무의 지원) : 해당직무분야 지원 기술자

(5) 감리원은 현장에 부임하는 즉시 현장사무소, 숙소 또는 비상주연락처의 전화번호 및 FAX 우편연락처 등을 발주청에	보고하여 업무연락에 차질이 없도록 하고 변경되었을 때에도 즉시 보고하여야 한다.

5. 세부수행 업무

1) 설계도서 및 착공신고서 검토내용 보고

(1) 감리원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서, 공사계약서 등의 계약내용과 본 공사의 설계보고서 등의 내용을	완전히 숙지하여 새로운 방향의 공법개선 및 예산절감을 기하도록 한다.

(2) 감리원은 설계서 등의 공사계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장실정과의 부합여부 등 현장시공에 주안점을	두어 해당공사 시행 전에 검토하여야 하며 검토내용에는 다음사항이 포함되어야 한다.

가) 현장조건에 부합여부

나) 실제 시공가능 여부

다) 타 사업 또는 타 공정과의 상호 부합여부

라) 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등과 부합여부

마) 설계서의 누락, 오류 등 불명확한 부분이 있는지 여부

바) 설계자가 제공한 공종 별 목적물의 수량산출서, 내역서와 시공자가 제출한 산출내역서의 일치여부

사) 시공 시 예상문제점 등

(3) 감리원은 검토결과 불합리하거나(착오, 누락, 불명확) 의문사항이 있을 시에는 그 내용과 의견을 발주청에 보고	하여야 한다. 또한 시공자에게도 설계도서 및 산출내역서 등을 검토하도록 하여 검토결과를 보고 받아야 한다.

(4) 착공 후 시공자로 하여금 세부 시공계획서를 작성, 제출케 하고 각 공정을 착수할 때마다 해당 공종에 대하여	구체적인 품질 확보방안이 포함된 시공계획서를 제출하게 하여 검토를 받아 승인을 득한 후 시공토록 하여야 한다.	(5) 감리원은 보수공사가 착공된 경우에는 시공자로부터 다음 각호의 서류가 포함된 착공신고서를 제출 받아 적정성	여부를 검토하여 7일 이내에 발주청에 보고하여야 한다.

가. 현장기술자 지정신고서(현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자, 품질관리시험요원)

나. 건설공사 예정공정표

다. 품질보증계획서 또는 품질시험계획

라. 공사도급계약서 사본 및 산출내역서

마. 착공전 사진

바. 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

사. 안전관리 계획서

아. 인력동원 및 장비 투입계획서

자. 기타 사업시행자가 요구한 사항

2) 사무실 및 서류 등의 보관

(1) 시공자가 제공하는 감리사무실은 공사규모 및 현장실정에 부합되도록 업무용 사무실과 상황실, 숙소를 사업 시행자와	협의하여 감리업무에 지장이 없도록 설치하고, 시험실은 가급적 감리원 사무실 옆에 배치토록 하여 효율적인 업무	추진이 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 현장의 중요도 또는 위험도에 따라 제한구역 및 통제구역을 설정하여	운영할 수 있다.

(2) 감리원은 착공과 동시에 공사 설계도서 및 자료, 공사계약문서 등을 사업 시행자로부터 인수하여 관리번호를	부여하고, 관리대장을 작성하여 공사관계자 외에 유출을 방지하는 등 관리를 철저히 하여야 하며, 외부 유출시에는	발주청의 승인을 얻어야 한다.

(3) 시공자가 공사 중 사용하는 설계서도 필히 상기 요령에 의거 보관하여야 한다.

(4) 공사완료 후 설계도서는 발주청에 반납하거나 지시에 따라 폐기처분 한다.

(5) 감리원은 공사의 내용에 맞는 각종 법규정, 표준시방서, KS규정집 및 필요한 기술서적 등을 비치하여야 한다.

3) 공사안내 표지판 및 각종 표지판 제작 설치

(1) 감리원은 시공자에게 건설산업기본법 제43조와 관련한 공사안내표지판을 공사착공과 동시에 공사현장의 시점과	종점 또는 일반인들이 보기 쉬운 곳에 설치하도록 하여야 한다.

(2) 감리원은 시공자로부터 표지판의 제작방법, 크기, 설치장소 등이 포함된 표지판 제작설치 계획서를 제출받아	검토하고 발주청과 협의한 후 승인하여야 한다.

(3) 시설물의 안전을 확보하기 위한 점검시설, 교통신호등, 도로표지판 교통안전시설 등의 적정여부를 종합적이고	구체적으로 검토하여야 한다.

4) 확인측량 실시

(1) 감리원은 착공과 동시에 시공자로 하여금 발주설계도와 실제현장의 이상유무를 확인하는 확인측량을 조속히                  실시토록 하여야 한다.

가. 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP)등의 측량기준점의 위치(좌표)를 확인하고, 기준점은 공사 시 유실방지를	위하여 필히 인조점을 설치하여야 하며, 시공 중에도 활용할 수 있도록 인조점과 기준점과의 관계를 도면화하여	비치하여야 한다.

나. 공사 준공까지 보존할 수 있는 가수준점(TBM)을 시공이 편리한 위치에 설치하고 국립지리원에서 설치한	주변의 수준점으로부터 2㎞내외 구간마다 왕복 수준측량을 실시하여 왕복 허용오차 7.5√S(mm)(S:수준측량의	편도거리 ㎞)이내일 경우에 이를 보정하여 TBM의 표고를 결정한 후 이를 활용하여 수준측량을 실시한다.

(2) 감리원은 사전 설계도서를 숙지하고 확인 측량 시 입회, 확인하여야 하며, 필요시 실시설계 용역회사 대표자의	위임장을 지참한 임직원 등과 합동으로 이상유무를 확인토록 하여야 한다.

5)유관기관 합동회의 실시

(1) 감리원은 시공전에 당해 건설공사와 관련되어 있는 유관기관과 합동회의를 실시하여 공사중 각종 시설물이 손상으로	인하여 문제점이 발생되지 않도록 대책을 수립하여야 한다.

(2) 감리원과 시공자는 유관기관과 합동회의를 실시하기 전에 현장을 정밀하게 조사하고, 설계도서 등을 숙지하여	그 내용을 회의 참가자에게 자세히 설명하여야 한다.

6) 품질관리

(1) 중점품질관리 공종의 선정

감리원은 당해 건설공사의 설계도서, 시방서, 공정계획 등을 검토하여 품질관리가 소홀해지기 쉽거나 하자 발생빈도가	높으며 시공 후 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 소요되는 부위를 중점 품질관리 대상으로 선정하여 타 공종에            비하여 우선적으로 품질관리 상태를 입회, 확인하여야 하며, 중점 품질관리 공종 선정시 고려해야 할 사항은	다음과 같다.

가. 공정계획에 의한 월별, 공종별 시험종목 및 시험회수

나 시공자의 품질관리 요원 인원수 및 공정에 따른 인원 충원계획

다. 품질관리 담당 감리원의 인원수 및 직접 입회, 확인이 가능한 적정시험 회수

라. 공종의 특성상 품질관리상태를 육안등으로 간접 확인할 수 있는지 여부

사. 품질관리 불량 부위의 시정이 용이한지의 여부

아. 시공 후 지중에 매몰되어 추후 품질 확인이 어렵고 재시공이 곤란한지 여부

자. 품질 불량 시 인근부위 또는 타 공종에 미치는 영향의 대소

(2) 중점 품질관리 방안의 수립

감리원은 선정된 중점 품질관리 공종별 관리방안을 수립하여 시공자로 하여금 이를 실행하도록 지시하고 실행결과를	수시로 확인하여야 한다.

중점 품질관리 방안은 다음의 내용이 포함되어야 한다.

가. 중점 품질관리 공종의 선정

나. 공종별로 시공 중 및 시공 후 발생예상 문제점

다. 각 문제점에 대한 대책방안 및 시공지침

라. 대상 구조물, 시공부위 하자발생가능성이 큰 부위선정

마. 세부관리 항목의 선정

바. 공종별 품질관리지침

사. 대장을 작성, 기록관리하고 확인하는 절차

(3) 관리방법

중점품질관리 대상으로 선정된 공종의 효율적인 품질관리를 위하여 다음과 같이 관리한다.

가. 감리원은 중점 품질관리대상으로 선정된 공종별 관리 방안을 수립하여 공사 시행전에 발주청에 보고하고	시공자에게 통보

나.	해당 공종 및 시공부위는 상황판이나 도면등에 표기하여 발주청의 직원, 감리원, 시공자 모두가 이를 알수 있도록 함.

다.	공정계획 시 중점 품질관리 대상 공종이 동시에 여러 개소에서 시공되거나 공휴일, 야간 등 관리가 소홀해질	수 있는 시기에 시공되지 않도록 조정

라.	필요시 해당부위에 :중점 “품질관리공종” 안내간판을 설치하고 주의사항을 명기

마.	특히, 콘크리트 타설시에는 가수하는 행위가 발생하지 않도록 사전에 교육시켜야 하며 시공 중에는 감리원과                시공사의 담당 기술자가 반드시 입회

바.	바다모래를 콘크리트용 세골재로 사용할 경우에는 염분함유 상태가 시방기준(콘크리트표준시방서 3.4.5해사참조)에	만족하는지 확인하여야 한다.

(4) 품질시험․검사기준

가. 감리원은 시공자가 작성한 품질관리계획서 또는 품질시험계획서에 따라 품질시험․검사가 실시되는지를 확인                 하여야 한다.

나. 품질시험 및 검사를 한국표준화법에 의한 한국산업규격, 건설기술관리법 제24조 제1항에 각 호에서 정하는                    기준 또는 건설교통부령이 정하는 품질시험 기준에 의하여 실시되는지 확인하여야 한다.

(5) 품질시험․검사의 대행

품질시험․검사를 실시하여야 할 건설공사의 발주기관 또는 시공자는 국․공립시험기관 또는 건설교통부장관이              지정하는 품질검사 전문기관에 품질시험의 실시를 대행하게 할 수 있다.

(6) 품질시험․검사 실적보고

감리원은 매월 품질시험․검사실적을 종합하여 시험․검사실적 보고서를 확인하여야 한다.

(7) 시험․검사성과의 관리 및 활용

감리원은 기성부분 또는 예비준공검사를 실시하는 경우 품질시험․검사 총괄표를 검토하여야 한다.

(8) 시공자의시험 담당직원의 선임 및 시험장비 비치

가. 시공자가 제출한 품질시험 직원의 자격증 소지여부와 당해 공사의 품질관리 업무를 원활히 수행할 수 있는지에               대하여 검토 후 발주청에 제출하여야 한다.

나. 감리원은 현장품질시험을 철저히 시행하기 위하여 시험장비 및 시험요원을 필히 현장시험실에 비치 및 배치토록                하여야 하며, 그 계획 및 결과를 공사착공 20일 이내에 제출토록 하여야 한다.

다. 시공자의 현장시험 담당직원 및 시공에 따라 필요한 시험기구가 현장에 배치 및 비치 되기 전에는 시공을 하지               않도록 하여야 한다.

라. 각종 시험기기는 소정 기간내에 검정하여야 하고 검정필증 및 검증결과에 의한 보정치를 당해 시험기기 상단부에               잘 보이도록 부착하여야 한다.

7) 각종 운반거리 확인

(1) 감리원은 골재원, 사토장에서 공사장까지의 운반거리 및 현장내의 운반거리를 측정한 후 도면을 등을 작성하여              결과 보고하여야 한다.

(2) 철근 등 한 장소에 집중 보관 관리하여야 하는  주요자재의 운반거리는 현장보관장소와 관리장소까지의 운반거리            및 보관장소의 작업현장까지의 현장 평균 운반거리를 별도 측정하여 결과 보고하여야 한다.

8) 공사용 장비 협의 결정 및 투입촉구

감리원은 착공계 제출시의 장비투입계획서상의 장비의 규격, 투입방식 등에 대한 적정성 여부를 면밀히 검토하고             부적정할 경우에는 장비투입계획의 조정등 필요한 조치를 취하여야 하며, 또한 필요한 장비를 조속히 투입토록 하여야         한다.

9) 교통처리계획

감리원은 차량통행이 원활하도록 일상순찰, 안내간판설치 등 유지관리를 철저히 하여야 하며, 이상이 발견되면 즉시           조치하고 그 결과를 발주청에 보고하여야 한다.

10) 금일작업계획 및 명일작업계획서 확인, 검토와 감리일지 및 자재 수불부 등의 정리

(1) 감리원은 시공자로부터 금일작업 실적서를 제출받아 현장대리인, 공무담당자, 자재담당자, 시험실장 및 노무 담당자등            관계직원 합동으로 금일작업에 대한 실적확인을 하고 시공결과 잘못 시공한 것에 대한 문제점 지적 및 재시공 등의            지시와 이러한 문제점이 재발되지 않도록 하는 대책협의 및 공사 추진 상 필요한 공사회의를 실시하고 회의 결과를            기록 유지하여야 한다.

(2) 감리원은 시공자로부터 작업계획서를 제출받아 금일작업 실적과 사용자재량, 품질관리 시험횟수 및 성과등이 부합            되는지의 여부를 확인하고, 명일 작업계획량에 대한 사전 관리시험계획과 자재사용 계획의 일치여부를 검토 확인             하여야 한다.

(3) 금일 작업실적을 확인, 점검할 때는 필히 품질관리시험 실시여부와 그 성과를 확인하여야 한다.

(4) 당일 작업량, 자재사용량, 관리시험 시행 등을 확인하고 모두 일치하면 금일작업 계획서에 기재된 작업된 자재사용량을            감독일지 및 주요자재 수불부에 기록 정리하여야 한다.

(5) 명일 작업계획서를 받을 때에는 상기 관계자와 필히 그 시행상의 가능성 및 각자 수행하여야 할 사항에 대하여

철저히 협의 검토하여야 한다.

(6) 자재 담당자에게 자재수불 상황과 작업종료후 사용량 및 잔량유무의 점검을 철저히 하도록 지시하여야 한다.

(7) 작업 종료 후에는 작업계획서에 의하여 작업이 진행되고 있는지 여부를 필히 점검 확인하여야 한다.

(8) 감리원은 감리업무 수행중 생산된 모든 문서에 대해서는 준공 후 발주청에 인계하여야 한다.

11) 자재공급원 승인 검토제출

(1) 사급 자재인 철근, 흄관, 강재, 시멘트, 골재 등 주요자재를 공급원 승인대상으로 한다.

(2) 자재공급원 승인 신청시에는 생산공장에서 저장한 골재의 품질 즉, 입도, 마모율, 조립율, 염분함유량 등에 대한              품질시험을 직접 실시하여 합격여부를 판단하여야 하며 공급원의 일일생산량, 기계의 성능, 각종기계의 정상적인             작동유무, 사용재료의 골재원 확보 여부, 동일골재(품질, 형상등)로 지속적인 사용가능 여부, 현장도착 소요시간 등에            대하여 사전에 충분히 조사하여 공사기간 중 지속적으로 품질관리를 하여야 한다.

(3) 사용되는 자재는 KS규격품을 사용하여야 하며, KS규격이 없을 시에는 감리단에서 사전검토를 철저히 한 후 사용            여부를 결정하고 주요 자재일 경우에는 발주청의 사전승인 득한 후 대체 사용할 수 있다.

(4) 공급원 승인후 반입하는 사용자재는 품질관리시험 및 품질변화 여부를 수시 확인하여야 한다.

(5) 공급원 승인요청은 2개 이상의 공급원을 제출받아 승인하여 제품의 생산중지 등 부득이한 경우에는 예비적으로              사용할 수 있도록 한다.

(6) 자재는 사용 전 공급원 승인을 득한 후 구매 사용토록 하여야 한다.

12) 주요자재 검수

(1) 자재공급원을 승인 받은 후 자재가 현장에 도착하면 즉시 수급인으로부터 반입된 송장사본을 제출받아 반입한	자재를 확인하고 그 결과를 기록, 비치하여야 한다.

가. 부실공사 요인을 각 공종별로 도출하되 현재의 공정계획 상 그달에 시공될 대상 공사에 대하여 매월별로 도출               하여야 한다.

나. 기능공이 숙련도 및 작업습관에 대한 부실요인도 도출하여야 한다.

다. 부실공사 방지대책에는 기능공 등 현장종사 전 직원에 대한 의식개혁 교육이 포함되어야 한다.

라. 감리원 전원과, 시공회사의 공사담당 전직원이 공사업무 수행시에는 도출된 부실요인을 항시 휴대하여 검측이나	현장 확인시에 이를 활용하여 부실요인을 근절시켜야 한다.

마. 매월별 수립된 부실공사방지 세부실천계획 및 실적을 정리하여 필히 비치, 보관하여야 한다.

13) 실정보고

(1) 감리원은 현지여건상 당초 설계대로 시공이 불가능하거나 구조상 변경이 필요할 시에는 즉시 시공자에게 변경하여야할            내용을 제출받아 이를 검토 확인한 후 의견서를 첨부하여 발주청에 신속히 실정보고 하여야 한다.

(2) 실정보고 후 지시가 있을 때까지는 작업을 시행토록 하여서는 않된다.

(3) 감리원은 공사시공 중 불가항력적인 재해의 발생, 공사중단의 필요성, 설계와 현지실정의 불일치, 감리원의 권한에            속하지 않는 사태가 발생될 경우 육하원칙에 따라 검토의견을 첨부하여 발주청에 실정을 상세하게 보고하여야 한다.

14) 시공 후 매몰부분에 대한 조치

감리원은 시공 후 매몰되거나, 사후 검사가 곤란한 구조물은 반드시 현장 검측한 후 시공상태를 증빙할 수 있는 사진         (필름포함) 또는 비디오로 촬영(기초 암반은 천연색 사진촬영) 테이프와 상세한 시공기록을 작성 비치하여야 하며,            발주청의 요구가 있을 때에는 이를 제시하여야 한다.

15) 공사용 사진촬영 및 비디오 제작

(1) 감리원은 공사 착수전에 주요 부분에 대하여 전경사진 및 비디오로 촬영하여 비치하여야 한다.

(2) 사진이나 비디오로 촬영 할때는 필히 전경과 근접촬영을 같이 하여야 한다.

(3) 사진첩은 공종별로 구분하여 작업과정을 일목 요연하게 알 수 있도록 촬영 보관하여야 한다.

(4) 각 사진마다 설명을 기재하여야 한다.

(5) 위 항의 필름을 포함한 사진첩2부 및 촬영한 비디오테이프를  제출받아 수시 검토․확인할 수 있도록 제작, 편집            하여 발주청에 제출토록 한다.

16) 민원 사전예방 및 처리

(1) 감리원은 민원이 발생할 수 있는지 검토하여 시공자에게 사전에 방지토록 조치하고 발생된 민원은 시공자와 처리            대책을 논의 조속히 처리하여야 한다.

(2) 발주청에 제출된 민원에 대하여 조사하도록 명을 받은 경우에는 그 사유를 송부하여 중간보고(제출기일 2일전)를            하여야 한다.

(4) 감리원이 민원에 대한 정보를 사전 입수한 경우에는 발주청에 즉시 보고함과 동시에 민원발생 원인 및 대책 등을            수립하여 사전 대처하여야 한다.

(5) 민원인이 감리원 또는 현장관계자와 면담요구가 있을 시에는 요구사항을 친절, 성실하게 청취하고, 설계내용을               상세히 설명하여 이해를 설득시키거나 민원사안이 명확하고 타당할 시에는 검토의사를 표시하고 민원내용, 현지여건            및 검토의견을 발주청에 즉시 보고 후 결과에 따라 조치하여야 한다.

17) 안전관리 및 환경관리

(1) 감리원은 공사수행에 따른 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 시공자가 수립한 안전관리 대책의 적정여부를 검토            하여야 한다.

(2) 시공자의 안전관리 점검상황을 재점검하여야 하며, 시공자의 안전관리 이행사항을 직접 현지점검 및 확인하고 그            기록을 비치하여야 한다.

(3) 설계에 계상된 안전관리비 사용실적을 확인하고 그 결과를 비치하여야 한다.

(4) 시공자가 현장 종사자들에게 수시 및 정기안전교육을 실시하도록 하여야 한다.

(5) 시공 구간 내 위험개소에는 필히 안전조치를 취하고 안내간판을 설치토록 하여야 한다.

(6) 복잡한 작업장에는 안전시설을 설치하여야 한다.

(7) 가시설 등 위험이 우려되는 작업 시에는 안전모를 항시 착용토록 하고 안전표지판 설치와 필요시 안전감시원을              배치토록 한다.

(8) 감리원은 시공자에게 세부 공종별 안전관리계획서를 제출토록 하여 안전관리 계획서 및 시방서와 연계하여 안전상             문제점을 사전에 검토하고 시공자에게 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

(9) 시공자가 제출한 현장 안전관리자의 자격기준 및 경력 등을 검토하여 적임여부에 대한 의견서를 첨부하여 발주청에            보고하여야 한다.

(10) 감리원은 안전관리 교육계획을 수립하고 시공자에게 정기 및 수시  교육을 실시하여야 한다.

(11) 감리원은 산업안전보건법에 의한 모든 안전관리 지침사항에 대하여 이행하여야 하며, 현장 감리원의 과실로 인한             안전관리 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

(12) 감리원은 공사로 인하여 대기 및 수질오염, 악취, 분진, 소음, 진동  등 환경 오염이 발생되지 않도록 하여야 한다.

18) 체불노임 등의 확인

(1) 현장 감리원은 시공자의 노임지불 대장을 수시 확인하여야 한다.

(2) 확인결과 노임체불이 있을 시는 즉시 노임체불을 해소하도록 시공자에게 촉구하여야 하며 이에 대한 대책을 수립            하여 발주청에 보고하여야 한다.

19) 하도급 계약내용 검토 및 하도급자의 지도감독

감리원은 하도급 계약 내용에 대하여 아래사항을 검토하여 그 의견을 제시하여야 한다.

(1) 감리원은 시공자가 도급 받은 건설공사를 건설산업기본법 제29조 및 제30조, 공사계약 일반조건 제42조의 규정에            의거 하도급 하고자 발주청에 통지하거나 동의 또는 승낙을 요청하는 사항에 대해서는 다음 각호의 사항에 관한             적정성 여부를 검토하여 발주청에 제출하여야 한다.

가. 하도급자 자격의 적정성

나. 하도급 통지기간 준수 등

(2) 감리원은 (1)항에 의거 처리된 하도급에 대해서는 시공자가  건설산업기본법 제34조 내지 제38조 및 하도급에                대해서는 시공자가 건설산업기본법 제34조 내지 제38조 및 하도급 거래공정화에 관한 법률에 규정된 사항을 이행             하도록 지도, 확인하여야 하며, 또한 기본법 제30조 제1항에 규정된 전문건설공사 하도급 비율을 준수하도록 착공             단계부터 관리하고 지도, 확인하여야 한다.

(3) 감리원은 시공자가 하도급 사항을 (1)항 및 (2)항에 의거 처리하지 않고 위장하도급 하거나, 무면허자에게 하도급             하는 등 불법적인 행위를 하지 않도록 지도하고, 현장입구에 “불법”하도급 행위 신고 표지판을 시공자에게 설치              하도록 하여야 한다.

20) 설계변경 단가 및 수량산출서 검토

감리원은 공사중 시공자가 제출한 설계변경 단가와 수량산출서 등을 검토하여 의견서를 첨부 발주청에 제출하여야 한다.

21) 현장내 발생된 문제점 검토등

(1) 감리원은 당해연도 계약구간 이외의 공사구간에 대하여도 수시로 현장을 순찰하여 공사장 관리를 철저히 하여야 한다.

(2) 또한 공사 시행 중 발생되는 기술적인 검토사항과 문제점에 대하여는 해당 분야별 비상주감리원으로 하여금 현지            확인 검토(필요시 현장시험등 실시) 후 보고서를 책임감리원이 제출받아 공사시행계획을 수립보고 하여야 한다.

22) 응급조치

(1) 감리원은 태풍피해, 천재지변 등 불가항력적으로 공사구간에 피해가 발생되어 이를 즉시 보수치 않고 방치함으로서             안전사고 등 제반 문제점이 야기될 경우에는 즉시 응급 조치토록 함과 동시에 보고하여야 한다.

(2) 응급 조치할 시는 사전에 피해량 조사, 피해도면 작성, 세부 및 전경 사진을 촬영토록 하여야 한다.

23) 보고사항

(1) 정기보고

가. 월간 또는 분기 감리보고서

감리원은 다음 사항을 포함한 감리보고서를 매월 또는 분기마다 발주청에 제출하여야 한다. 보고서의 제출기한은	익월 7일 이내로 한다.

(가) 공정현황 : 주요공정별 간략한 설명이 포함되고 계획 및 실적이 표시된 공정현황

(나) 품질관리 시험․검사실적

(다) 안전관리 실적보고

(라) 자재 수불현황

(마) 신기술, 특수공법 사용 실적

(바) 인력 및 장비투입 실적

(사) 기타 감리업무 수행에 중요하다고 인정하는 사항

나. 최종 감리보고서

감리원은 다음 사항을 포함한 최종 감리보고서를 감리기간 종료 14일 이내로 감리회사 대표자 명의로 발주청에	제출하여야 한다.

(가) 사업개요 : 전체공사 및 감리용역 개요

(나) 기술검토내용 총괄 실적

(다) 공사 추진내용 총괄실적 : 인력, 장비투입 현황 등

(라) 검측내용 총괄 : 전체공사 및 감리용역 개요

(마) 우수시공 및 시공실패 사례

(바) 품질시험․검사총괄, 품질관리비의 사용실적

(사) 안전관리 실적총괄 : 안전관리활동, 안전관리비 사용실적, 안전사고 발생건수 및 원인 방지대책

(아)종합분석

(2) 수시보고

감리원은 다음 각호의 사항을 검토하고 필요시 의견을 첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

가. 다음 각 호의 시공자 제출서류

- 착공 신고서

- 공정보고

- 주요자재 공급원 승인 신청

- 품질시험․검사 실적보고서

- 각종 시험성적표

- 설계변경 여건보고

- 준공기한 연기신청서

- 기성․준공검사원

- 하도급 통지 및 승인요청서

- 현장 실정보고서

- 안전관리 추진실적 보고서

(안전관리 활동, 안전관리비 사용실적 등)

- 물량 확정보고서 및 물가 변동지수 조정율 계산서

- 품질보증 계획서 및 품질시험 계획서

- 명일 작업계획서

- 기타 필요한 서류 및 도표(천후표, 온도표, 수위표, 조위표 등)

나. 다음 각 호의 현장상황 보고사항(현장 긴급사항)

- 감리원은 공사시공 중 불가항력적이 재해의 발생, 공사중단의 필요성, 감리원의 권한에 속하지 않는 사태가	발생될 경우 육하원칙에 따라 검토의견을 첨부하여 발주청에 현장상황을 신속히 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

- 감리원은 공사현장에 다음 사태가 발생하였을 때에는 필요한 응급조치를 취하는 동시에 상세한 경위를 발주청에	즉시 보고하여야 한다.

․천재지변등 기타의 사유로 공사현장에 피해가 발생하였을 경우 공사현장의 피해에 대하여 응급조치가 필요할	시는 사전에 피해량 조사, 피해 상세 도면 작성 및 전경 사진을 촬영하여 두어야 한다. 또한 감리원은 피해	발생의 불가피성 여부 및 피해액에 대한 부담 의무자를 검토한다.

․시공자의 현장 대리인이 사전 승인없이 3일 이상현장에 상주하지 않을 때

․시공자가 정당한 사유없이 공사를 중단할 때

․시공자가 공사시행을 불성실하게 하거나 감리원의 정당한 지시에 불응할 때

․시공자가 계약에 따른 시공능력이 없다고 인정되거나 공정이 현저히 미달될 때

․시공자가 불법 하도급 행위를 할 때

․기타 공사추진에 지장이 있을 때

다. 재시공 및 공사중단 명령을 한때

- 감리원은 시공자가 공사의 설계도서 시방서 기타관계 서류의 내용과 적합하지 아니하게 당해 공사를 시공	하는 경우에는 재시공, 공사중지 명령 및 기타 필요한 조치를 할 수 있다.

- 감리원으로 부터 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받은 시공자는 특별한 사유가 없는 한	이에 응하여야 한다.

- 감리원이 시공자에게 재시공, 공사중지 명령, 기타 필요한 조치를 취한 때에는 지체 없이 이에 관한 사항을	발주청에 보고하여야 한다.  다만, 경미한 시정사항 및 재시공은 보고를 생략할 수 있다.

- 발주청은 감리원으로 부터 재시공, 공사중지 명령 기타 필요한 조치에 관한 보고를 받은 때에는 이를 검토한	후 시정여부의 확인, 공사재개 지시등 필요한 조치를 하여야 한다.

- 감리원은 재시공, 공사중지명령을 하였을 경우, 발주청이 공사 중지 사유가 해소되었다고 판단되어 공사재개를	지시 할 때에는  이를 검토한 후 시정여부의 확인, 공사재개 지시등 필요한 조치를 취하여야 한다.

- 감리원은 재시공, 공사중지 명령을 하였을 경우 발주청이 공사 중지 사유가 해소되었다고 판단되어 공사재개를	지시 할 때에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 공사중지 및 재시공 지시 등의 적용한계는 아래와 같다.

․재시공 ; 시공된 공사가 품질확보 상 미흡 또는 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나 관계 규정에 재시공을	하도록 규정된 경우

․공사중지 ; 시공된 공사가 품질확보 상 미흡 또는 중대한 위해를 발생시킬 수 있다고 판단되거나, 안전상	중대한 위험이 발견될 시에는 공사중지를 지시할 수 있으며 공사중지는 부분중지와 전면중지로 구분한다.

a. 부분중지

ㄱ. 재시공 지시가 이행되지 않는 상태에서 다음단계의 공정이 진행되므로서 하자발생이 될 수 있다고 판단될 때

ㄴ. 안전시공상 중대한 위험이 예상되어 물적, 인적 중대한 피해가 예상될 때

ㄷ. 동일공정에 있어 3회이상 시정지시가 이행되지 않을 때

ㄹ. 동일공정에 있어 2회이상 경고가 있었음에도 이행되지 않을 때

b. 전면중지

ㄱ. 시공자가 고의로 보수공사의 추진을 심히 지연시키거나, 부실발생 우려가 농후한 상황에서 적절한 조치를 취하지	않은채 공사를 계속 진행하는 경우

ㄴ. 부분중지가 이행되지 않음으로서 전체공정에 영향을 끼칠 것으로 판단될 때

ㄷ. 지진, 해일, 폭풍등 천재지변으로 전체공정에 영향을 끼칠 것으로 판단될 때

ㄹ. 전쟁, 폭동, 내란, 혁명상태 등으로 공사를 계속할 수 없다고 판단되어 발주자로부터 지시가 있을 때

․감리원은 시공자가 감리원의 재시공, 공사중지명령 등에 대한 필요한 조치를 이행하지 아니한 때에는 건기법	제42조 제5호의 규정에 의한 조치를 취하도록 발주청에 요구하여야 한다.(시공자에 대한 제재 요구)

(라) 시공자가 다음사항의 불법하도급 행위를 한때

․하도급 통지 또는 승인사항에 위반하여 하도급하거나 일괄 하도급 하는 경우

․하도급 업체가 재 하도급 하는 경우

․사업 시행자가 시공자에게 선급금, 기성금, 준공금을 지불한 경우 시공자가 하도급자에게 선급금, 기성금	준공금의 내용과 비율에 따라 법정 기간내에 지불하지 아니한 경우

․하도급 대금지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생한 경우

(마) 기타 시공과 관련하여 중요하다고 인정되는 사항이 있을 때

- 현장대리인 및 하도급자 등의 교체가 필요한 때

- 세부공정계획, 시공자의 현장기술자 확보사항, 기타 공사계획에 관한 검토한 결과 공사진행상 문제가 있다고	판단되는 경우

24) 공정관리

감리원은 당해 공사가 정해진 공기내에 설계도서 등에 의거하여 완성될 수 있도록 지도, 감독하여야 한다.

(1) 감리원은 시공자가 제출한 공정계획이 공사의 종류, 특성, 공기 및 현장의 실정 등을 감안하여 수립되었는지	검토․확인하고, 시공의 경제성과 품질확보에 적합하게 실행성 있는 최적공기가 되었는지를 검토하여야 한다.

(2) 공사추진이 부진하여 공기 내 준공에 지장이 예상될 경우에는 공정만회대책을 수립하여 시공자에게 장비, 인원등의              추가 투입을 지시하여야 한다.

(3) 공사 추진상 문제가 있다고 판단될 경우에는 발주청에 검토의견을 첨부하여 보고하여야 한다.

(4) 공사가 현장실정에 따라 공기연장이 불가피 할 경우, 공기연장 사유가 타당성이 있는지 여부를 검토한 의견서를	첨부하여 발주청에 보고하여야 한다.

(5) 감리회사의 귀책사유로 공정이 늦어지게 되어 감리기간이 늘어나게 된 때에는 당초 계획기간 이외의 근무기간	동안은 감리용역비를 지급받지 못한다.

(6) 공사기간 산정은 CPM공정계획 등에 의거 정확하고 합리적으로 판단하여야 한다.

25) 감리원은 현재 수행중인 감리용역 전체과업의 범위 중 이미 준공된 부분에 하자(장기 계속공사의 전차분)가 발생             하였을 때에는 시공자가 제출한 보수방법 등의 적정여부를 검토하여야 하며, 하자 보수공사 시에는 감독을 철저히            하여야 한다.

26) 각종 일지 정리(건설기술관리법 및 동법시행 규칙에 준함)

(1) 책임감리원은 공정현황, 기자재검토, 하도급, 안전관리, 사업시행자의 지시사항 등에 대한 서류 및 도표를 작성하여            비치하고 준공 시 발주청에 제출하여야 한다.

(2) 공사 감리일지

가. 책임감리원은 시공자에게 아래 서식에 의한 금일 작업실적 및 명일 작업계획서(이하 :\“작업일지”라 한다.)를                  제출받아 금일 작업실적인 시공량, 사용자재량, 품질감리 시험 회수 및 성과 등을 종합적으로 검토․확인하고                확인된 물량을 감리일지에 기재하여야 하며, 명일 작업계획의 적정여부, 사용자재 불출, 시험계획 등을 검토                  확인하여 명일 작업 시행여부를 결정하여야 한다.

(3) 일일업무 수행일지

가. 책임감리원과 보조감리원은 당일 작업계획서 등에 따라 각자가 수행한 업무내용을 기록한 일지, 즉 일일업무                 수행일지(이하 “일지”라한다.) 를 개인별로 작성하여야 한다.

나. 책임감리원은 시공자의 작업실적과 당일 감리업무 계획을 비교 검토하여 시공자의 작업실적에 부응되도록 보조               감리원이 감리업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 확인하는 등 감리 개인별로 작성한 업무 수행일지를                  총괄한 종합일지를 작성, 비치하여야 하며, 종합일지의 주된 내용은 월간보고서에 수록하여야 한다.

(4) 명령부

책임감리원은 발주청으로부터 명령을 받았을 때에는 직접 조치할 사항은 직접 조치하고, 시공자가 조치하여야 될             사항은 문서로 지시하여 이행여부를 확인하고, 명령에 대한 처리결과를 즉시 보고하여야 한다.

(5) 지시부

가. 책임감리원은 명령받은 사항 중 시공자에게 지시할 사항 또는 금일 작업중 시정하여야 될 사항 등에 대하여는	시공자에게 육하원칙에 의한 지시부를 발송하여야 하며, 단기간내 시정을 요구한 사항은 신속히 조치결과를	보고토록 하고, 조치에 장기간이 소요되는 내용은 조치계획 및 추진일정을 시공자로부터 제출받아 단계별 조치	내용을 확인하고 최종조치	결과 보고를 확인하여 공사추진에 철저히 기하여야 한다.

나. 책임감리원은 공사 시행 중 발견된 시정사항에 대하여는 발견즉시 시정토록 지시부를 발송하여 즉시 시정토록	하고 시정이 완료될 때까지 후속 작업을 시공하지 않도록 하여야 하며, 시공자로부터 시정완료 일시 및 조치

내용이 기록된 회신공문을 제출받는 즉시 확인하여 후속작업 추진에 지장이 없도록 하여야 한다.

(6) 발생품 정리부

기존 구조물 철거 시 발생되는 발생품에 대하여 수량․규격을 확인하고 보관관리가 용이한 곳에 운반토록 하며,              발주청에 보고하여 그 지시에 따라야 한다.

(7) 주요자재 수불부 정리

가. 감리원은 주요자재 현황을 파악하기가 용이하도록 일정장소에 보관하여야 하며, 특히 철근은 규격별로 구분                  하여 한곳에 저장, 가공하여 명일작업 계획에 따라 운반, 조립토록 하고 잔량 발생 시에는 저장장소로 운반                  토록 하여야 하며, 금일사용 실적을 작업일지에 기록하여야 한다.

나. 확인된 주요자재 사용량을 당일 즉시 자재수불 상황부에 기재하고 책임감리원 확인, 날인을 하여야 한다.

다. 명일 작업계획서 내용을 검토하여 사용계획량만을 출급하고 금일 작업실적에서 확인된 미사용 주요 자재량은	명일 사용계획에서 제외한량을 출급하여야 한다.

27) 발주청의 자문요구 및 감리원의 의견제시

발주청은 공사 중 본 공사와 관련하여 시공자의 공법변경 요구등 중요한 기술적인 사항에 대하여 감리원에게 자문을	서면으로 요구할 수 있고 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다. 상당한 시간과 비용이 소요되거나 제3자에게 의뢰	하여야 하는 전문성이 요구되는 내용에  대하여는 제3자에게 의뢰하여야 한다.

28) 기성․준공검사 및 하자보수

(1) 검사자의 임명

가. 감리회사 대표자는 기성부분 검사원 또는 준공계를 접수 하였을 때는 소속 비상주 감리원 중 고급감리원 이상의               자료 검사자를 임명하고 즉시 본인에게 통지하여야 하며 이 사실을 발주청에 보고 하여야 한다.

나. 감리회사 대표자는 현장감리원이 확인한 검사원 및 감리조서를 접수 하였을 때는 접수된 날로부터 14일 이내에                발주청에 검사결과를 보고 하여야 한다.

다. 감리전문회사 대표자는 검사자의검사에 합격되지 아니한 부분이 있을 때에는 즉시 시공자로 하여금 보완시공                 또는 이견이 있을시 검토의견을 제출하여야 하며, 사업시행자가 하자보수 대책수립을 요청할 경우 이에 협조                 하여야 한다.

29) 준공도면

(1) 공사를 준공할 때에는 필히 준공도면 (KS E1001에 의한 KS A5201의 A1크기)을 작성하여 발주청에 제출하여야             한다.

(2) 준공도면에는 실제 시공한 규격 등을 작성하여야 한다.

(3) 책자형 축소 준공도면 (A3[297×420m/m]크기)의 표지는 장기 보관시 훼손되지 않는 재질을 사용하여야 한다.

(4) 준공도면 원도는 마이크로 필름화 및 CD화를 추진하고 준공도면 제작비 및 원도의 마이크로 필름화비용을 설계에            반영한다.

(5) 책임감리원은 상기 준공도면과 별도로 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제17조 및 동법시행규칙 제12조 규정에             의한 준공도서를 시공자로 하여금 작성토록 하고 그결과를 비상주 감리원과 합동으로 점검․확인․검토하여                 발주청 및 시설안전기술공단에 제출하여야 한다.

6. 발주청의 지도감독 등

(1) 발주청은 소속직원을 지원업무수행자로 임명하여 현장에 상주시킬 수 있으며 지원 업무수행자가 공사의 원활한              추진을 위하여 감리원에게 필요한 사항 또는 잘못된사항 등을 시정하기 위한 지시에 모든 감리원은 따라야 한다.

- 감리원에 대한 지도․감독(근태사항 확인 점검등)

- 감리원의 적정 자격보유여부 및 상주이행상태 지도점검

- 감리원의 품위손상 여부 및 근무자세 지도점검

- 발주청의 지시사항 이행상태 지도점검

- 행정서류 및 비치서류 처리상태 지도점검

- 각종 보고서의 처리상태 지도점검

- 책임감리용역의 기성 및 준공검사

- 감리자의 감독업무 수행능력 판단 및 이에 대한 보고

- 감리자가 공사를 감독함에 있어 특별한 사유없이 공사를 지연시키는 사실이 있는지 여부 파악

- 현장에서 발생하는 각종 민원사항 파악, 검토

- 보상업무 협의 추진

- 공기 연장등 주요사항 발생시 현지 확인 및 검토․보고

- 설계변경사항의 요인 파악 및 보고

- 공사관계자 회의 참석, 발주청의 지시사항 전달 및 공사수행 상 문제점 파악․보고

- 공사 기성검사 및 준공검사 시 입회(필요시)

- 책임감리원 및 상주감리원의 개인업무일지 기록 확인

- 준공도서 등의 인수

- 하자 발생 시 현지조사 및 사후조치

- 기타 발주청의 필요하다고 판단한 사항

(2) 발주청은 지원업무수행자 또는 소속 직원을 임명하여 감리원의 근태점검을 수시로 실시할 수 있으며 근무시간 중에            사전승인 등의 절차없이 근무지를 무단 이탈하는 사례가 일정 횟수 이상 적발되는 감리원은 관계규정에 따라 소정의            불이익 처분을 받아야 한다.

(3) 감리원의 업무수행 능력부족 또는 고의․과실등으로 공사실정보고 및 설계변경지연, 공사검측 지연, 기성검사지연            등의 사실이 발견되면 발주청이 해당 감리원을 교체 지시한 경우에는 정당한 사유가 없는한 즉시 교체하여야 한다.

특별과업지시서

1. 감리용역기간 : 감리착수일로부터 본 공사의 준공검사 완료일까지 25개월로 한다.

2. 설계변경조건

1) 건기법에 의한 감리대기 기준이 변경되었을 때

2) 감리기간 및 책임감리의중단 등으로 감리기간이 증․감 되었을 때

3) 감리업무령에 따라 감리원수의 증․감이나 등급변경이 되었을 때

4) 재경비 및 기술료는 직업인건비 증․감에  따라 정산한다.

5) 직접경비는 당해 업무수행에 필요한 감리원의 현지근무 수당, 숙박비 및 현지운영 등에 필요한 아래 내용을 포함하며         계상 기준은 건설공사 감리대기 기준(건설교통부 공고 제 2004-147호, 2004.6.17)에 따른다.

가) 감리원의 주재비 및 출장여비는 직접인건비의증․감에 따라 정산

나) 현지차량 운행비 및 현지사무원 급료비는 실지에 맞추어 정산

다) 보고서 등 인쇄비는 발간부수 및 면수에 따라 정산

6) 야간 및 휴일근무 등으로 감리원의근무일수에 변경이 있을 때

7) 기타 발주기관의 사정에 의한 예산상의 증․감 등 정당한 사유가 있을 때

Ⅳ. 보안 및 기타 유의사항

1. 국가보안상 중요하다고 생각되는 모든 기록과 자료는 시건 장치가 되어있는 함에 보관하고 열쇠는 책임감리원이 소지하여야     한다.

2. 모든 비밀문서는 관리번호를 부여하고, 보관관리기록부에 기록한 후 시건장치가 이중으로 되어있는 함에 보관하며 열쇠는     책임감리원이 소지하여야 한다.

3. 감리원은 본 업무와 관련있는 모든 기록과 자료에 대하여 업무와 관련없는 일에 사용할 수 없으며, 발주청의 사전 서면       승인 없이는 타인에게 제공 또는 대여 할 수 없다.

4. 편집된 모든 도서 및 기타 자료를 다른 목적에 이용 또는 이용토록 할 수 없으며, 감리업무수행중 취득한 사실을 누설하여     서는 안되며, 누설로 인하여 문제점이 발생될 시에는 감리원은 물론 감리전문 회사가 모든 책임을 진다.

5. 감리원은 보안대책을 수립하여 감리자의 대표자 및 참여직원이 자필서명한 보안각서 및 서약서와 함께 제출하여야 한다.

6. 사무실 및 설계도서, 작업디스켓 등의보안상 관리는 관리책임자 정․부를 지정하여 대장으로 기록 관리하여야 하며 기타      자세한 보안대책은 감리업무수행지침서에 의한다.

7. 본 감리용역에 참여하는 감리원은 투입과 동시에 개인별 인감 및 날인을 발주청에 제출하여 등록하여야 한다.

Ⅴ. 책임감리의 부실측정 및 조치

1. 발주청은 감리원이 감리를 성실하게 수행하지 아니하여 부실공사가 발생할 경우에는 부실의 정도를 측정하여 감리회사 및     해당 감리원에 대하여 부실벌점 및 업무정지 처분을 할 수 있다.

2. 발주청은 “1”의 규정에 의하여 부실벌점을 받은 감리회사 및 참여감리원에 대하여 그 부실벌점에 따라 입찰시 불이익을 줄     수 있다.

3. “1”“2”의 규정에 의한 부실정도의 측정기준, 불이익 내용, 업무정지 기간 등은 건설관계법률의 기준 및 관련규정에 의한다.

4. 감리원이 책임감리를 함에 있어 고의 또는 과실로 발주청에 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 당해 감리원이 속하는     감리사가 이를 배상하여야 한다.