정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2013-09

사업부서

작성자

문화관광과

(윤석윤/560-2370

/ykk2001@korea.kr)

정 책 명

화암동굴 모노레일 교체 및 승차장 증축공사

사업개요

및

추진경과

1. 추진배경

화암동굴 관광성수기시 기존 40인승 모노레일 차량의 수송량 절대

부족으로 인한 대기시간 지연에 따른 관광객들의 불편 해소.

2. 사업개요

가. 위    치 : 정선군 화암면 화암리 화암동굴 일원

나. 사 업 량 : 모노레일 교체 90인승 1대, 승차장 증축 1식

다. 총사업비 : 1,500백만원(군비 1,500)

라. 사업기간 : 2013. 3. 11～ 2013. 05. 09

3. 추진경과

가. 2013. 01월 : 실시설계용역 발주

나. 2013. 02월 : 실시설계용역 완료

다. 2013. 02. 26 : 계약심사 완료(정선군)

라. 2013. 03월 : 사업발주

마. 2013. 03. 11 : 사업착수

바. 2013. 05. 09 : 사업완료

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 지방시설7급 윤석윤

- 최종 결재자 : 지방행정5급 김수복

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	김수복	행정5급	‘13.01.10.~ ‘13.12.30.	용역 및 시설업무 총괄
담당	박종만	행정6급	‘11.01.10.~ ‘13.12.30.	용역 및 시설업무 총괄
주무관	윤석윤	시설7급	‘13.01.10.~ ‘13.12.30.	실무추진

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 기본 및 실시설계용역

- 정선건축사

○ 시공사

- (주)세강

추진실적

○ 용역 및 시설공사 완료